설 계 지 침 서

[긴급]

서안동농협 통합영농지원센터 신축공사 설계용역(재공고)

(기본 및 실시설계)

2023. 04. 07.

서안동농업협동조합

목    차

Ⅰ. 설계개요	1

1. 설계 목적	1

2. 설계 개요	1

3. 용역의 범위	2

Ⅱ. 공통 설계지침	3

1. 일반조건	3

2. 사용자재	4

3. 성능기준	5

4. 사전조사	7

5. 성과품 제출	8

6. 기타	9

Ⅲ. 분야별 설계지침	12

1. 건축계획	12

2. 기계설비계획	23

3. 소방설비계획	29

4. 전기설비계획	31

5. 정보통신설비계획	36

Ⅳ. 설계도서 작성요령	39

Ⅴ. 붙임 서식	43

1. 붙임 1. 책임기술자선임계	44

2. 붙임 2. 하도급 승인요청서	45

3. 붙임 3. 주간공정보고	46

3. 붙임 4. 월간공정보고	47

Ⅰ	설계 개요

1. 설계 목적

본 설계용역은 서안동농협의 통합영농지원센터 신축공사로 시설을 건립하여 통합영농지원센터로 통합 운영하여 경제사업 효율성 증대 및 조합원 편익 증진을 통한 사업 활성화에 기여하기 위한 기본 및 실시설계용역임

Ⅱ. 설계 개요

1. 부지위치

○ (신축) 경상북도 안동시 풍산읍 소산리 산58-6 임 외 2필지

2. 도시계획시설

○ 지    목 : 임야

○ 용도지역 : 계획관리지역

3. 건립규모

○ 부지면적 : 부지면적 5,376㎡, 건축 연면적 2,758.00㎡

○ 규모 및 용도 : 지하1층/지상1층, 농기계수리, 경정비, 자재판매점, 창고, 사무소

4. 총 예정공사비 : ￦5,100,000,000원 (부가가치세 포함)

○ 건축, 토목, 기계설비, 전기, 소방, 통신, 부대시설 등 일체

* 건축설계 관련 사업비(5,100백만원)에 맞추어 설계를 진행하여야 함

* 설계사업예산 사업비(360백만원)에 맞추어 설계를 진행하여야 함

5. 설계기간 : 착수일로부터 90일 이내 (계약 시 협의 가능)

가. 인허가 및 인허가를 위한 사전 심의기간 제외

나. 농협중앙회 총무부 또는 조달청을 포함한 안동시 기술검토기간 제외

다. 계약일로부터 5일 이내에 착수하고 착수계를 제출한다.

라. 서안동농협 통합영농지원센터 신축공사 사업에 대한 설계도서(시방서, 설계도면, 내역서)는 각 분야별로 작성하여 기한 내 납품해야 하며, 그 소유권은 서안동농협으로 한다.

마. 천재지변 및 설계를 위한 기본설계(안) 결정이 발주자 사정으로 지연될 경우 또는 각종 인허가 관련기관 협의에 따른 지연 시 상호 협의하여 설계기간을 연장할 수 있다.

Ⅲ. 용역의 범위

1. 설계용역 범위는 아래 주요 공종으로 구분하며, 각 공종별 세부사항은 건물기능 및    안전, 관련법규 등 필요한 경우는 모두 포함된다.

2. 공종별 용역의 범위

가. 설계용역 범위는 아래 주요 공종으로 구분하며, 각 공종별 세부사항은             건물 기능 및 안전, 관련법규 등 필요한 경우는 모두 포함된다.

나. 주요공종

구 분	용 역 대 상	비 고
건축부문	ㅇ 건축, 토목, 조경 등 ㅇ 건축허가 등 제반 인ㆍ허가 사항 ㅇ 지질조사(필요시) 등
기계부문	ㅇ 농기계수리, 경정비 설비 등 ㅇ 기계설비지침서 반영사항
소방부문	ㅇ 경보기, 유도등, 소화기 등 ㅇ 소방설비지침서 반영사항
전기부문	ㅇ 동력설비 등 ㅇ 전기설비지침서 반영사항
통신부문	ㅇ 통합배선 및 방송설비 등 ㅇ 통신설비지침서 반영사항

3. 일반지침

가. 최적의 건물배치와 내부 공간배치로 작업효율이 증대될 수 있도록 계획한다.

나. 부지활용의 효율성을 고려하여 건물을 배치하고 기존 부지 상황을 최대한 고려하여 경제적인 설계가 되도록 계획한다.

Ⅱ	공통설계지침

Ⅰ. 일반조건

1. 본 공사의 설계용역계약 목적을 달성할 수 있도록 설계자 책임으로 필요한 조사, 확인 및 검토, 기타 조치를 취하여야 한다.

2. 본 지침서에 지시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 지침의 내용이 불분명 하거나 명시가 누락된 경우에는 발주자와 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

3. 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 토목, 조경 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은 관련법령 및 기준 등과 본 설계지침서의 기준이 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

4. 설계도서는 기술 분야별 구분 작성하되 각 분야는 서로 긴밀히 협의하여 기능유지에 적합하고 상호 연관성을 갖도록 설계되어야 하며, 분야별 의견 충돌 시 발주자에게 알려 가장 합리적인 방향으로 조율될 수 있도록 한다.

5. 계약자는 설계용역 추진 단계별(기본, 중간, 실시) 설계도서 작업이 완료되면 발주자에 제출하여 심사를 받은 후 심사결과에 따라 수정하여야 하며, 설계도서 심사완료 후라도 설계상의 결함은 언제든지 수정 지시에 따라야 한다.

6. 설계에 적용되는 내용은 보편타당한 것이어야 하고 설계방법은 정부, 학회, 협회 등에서 인정하는 것이어야 한다.

7. 자재 등은 투자비, 내용연수, 유지관리비 등을 비교 분석하여 투자 효과가 가장 우수한 것을 선정하여야 한다.

8. 본 지침서에 특정되지 않은 사항에 대해 설계자는 계약문서와 관련법규 그리고 정부 제정 각종 시방서 및 기준에 따라 설계하여야 한다.

9. 건축물 또는 시설물의 안전에 관계되는 사항은 예측 불가능한 각종 변경 가능성을 충분히 고려하여 여유안전율을 확보토록 한다.

10. 본 공사에 특허권이 있는 공법 및 자재를 적용할 경우 특허권 사용에 관한 권리 등 모든 사항에 대하여 발주자의 승인을 득한 후 설계에 반영하고, 특허권 사용에 따른 분쟁 및 민원 발생시 이에 대한 모든 책임을 져야 한다.

11. 모든 도면 및 자료는 국문으로 표기하는 것을 원칙으로 하며, 모든 적용단위는 M.K.S 또는 C.G.S 단위 적용을 원칙으로 한다.

12. 납품설계도서의 인정

설계용역의 최종도면은 관계기관 각종 인허가 및 심의 등이 완료된 도면을 말한다.

13. 설계의 책임

가. 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며, 납품 후라 할지라도 설계상의 하자로 인한 모든 책임은 설계자가 부담한다.

나. 설계하자 등의 사유로 인한 도면 및 내역에 대해 수정이 필요한 경우 설계자 부담으로 성실히 시행한다.

다. 수급인은 보안상 결함이 없도록 최선의 노력을 다하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 져야한다.

라. 본 과업 수행 시 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인이 손실보상 및 책임을 져야 한다.

14. 설계도서 수정

가. 기본설계 및 실시설계 완료 전 등 중간보고를 실시하여 발주자의 의견을 듣도록 하며 수정사항이 있으면 발주자의 지시에 따라 수정한다.

나. 설계도서 작성이 완료되면 완성검사 전 발주자에게 제출하여 예비검사를 받는다. 만일 수정사항이 있으면 발주자의 지시에 따라 수정한다. 최종 수정된 설계서를 납품하여야 하며, 납품 후라 할지라도 설계도서 상의 결함사항은 수정 지시에 따라야 한다.

15. 검   사

가. 설계자는 설계가 완료되면 해당 공정 책임기술자가 확인 날인한 납품검사원을 제출한다.

나. 각종 검사를 하기 위하여 시험 및 검토에 필요한 비용은 설계자 부담으로 한다.

16. 각종인입공사비

설계 시 전력, 도시가스, 상수도, 통신 등 수요량을 산출하여 필요한 내용을 공사비에 포함한다.

Ⅱ. 사용자재

1. 모든 자재는 K.S 제품 또는 관련 법령에 의한 단체인증제품을 우선 사용하고 품질 인증 자재가 없을 경우 시중 최고품으로 한다.

2. 본 지침에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재는 최소한도의 기준을 명시한 것으로 동등 이상의 성능을 가진 자재를 이를 확인할 수 있는 증빙자료와 함께 발주자에게 제출하여 발주자가 선정할 수 있도록 하여야 한다.

3. 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도서에 명기하고 주요자재 및 공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법에 대한 정확한 시방이 제시되어야 한다.

4. 가급적 특정회사의 특정자재 적용은 지양하고, 불가피하게 적용 시에는 발주자의 승인을 받아 시행하고, 특정회사 상품명이 일반제품처럼 되어 있는 제품명은 일반화된 자재명으로 표현한다.

5. GAP시설 인증 요건에 충족시키고 경제적인 자재를 사용하여 설계한다.

Ⅲ. 성능기준

본 건축물은 다음에 제시하는 성능 이상이 확보되도록 설계하여야 한다.

1. 기능

가. 용도별 시설물은 배치계획 시 기존 유통센터 시설과 서로 유기적으로 연계될 수 있도록 각 기능별 특성 및 유지관리의 효율성 등을 고려하여 계획되어야 한다.

나. 각 실의 실내 공간은 그 용도에 적합하도록 파렛트 크기를 검토하여 기능적이며 미적으로 계획되어야 한다.

2. 구조안전성

가. 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 내진성능, 내풍성능, 내화성능, 내설성능, 내충격성능을 가져야 한다.

나. 건물의 기능, 규모, 시공성, 경제성, 안전성 등을 고려하여 우수한 구조를 선택한다.

3. 내구성

가. 건물에 작용 또는 영향을 미치는 각종 역학적 하중, 열, 자외선, 물, 습기, 화재 등에 대하여 필요한 조치를 하여 소요의 내구성이 확보되도록 설계하여야 한다.

나. 부식성 자재 등은 적정한 방청 처리를 하여야 한다.

다. 각종 자재는 가급적 내구성이 가장 높은 등급의 것을 사용하여야 한다.

4. 방화 및 안전성

가. 구조물은 내화구조이어야 한다.

나. 사용자재는 가연성인 자재가 아니어야 하며, 사용할 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 확보되도록 한다.

다. 화재가 발생할 경우에 화재 확산이 최소화 되도록 필요한 방화구획 등을 설치하고, 인명피해를 줄일 수 있도록 필요한 경보, 유도, 피난 등 관계 법령에 적합하게 설계한다.

라. 각종 마감은 일상적인 사용에 의하여 탈락 또는 신체에 위해를 끼치지 않도록 설계한다.

마. 방범, 방재, 방진, 방습, 방서 등에 대한 대책이 고려되어야 하며, 불의의 사고에 대한 충분한 대책을 강구하여야 한다.

5. 단열 및 보온성

가. 건물의 각 부위별로 법령 등에서 규정한 값 이상의 단열성능이 확보되도록 하여야 한다.

나. 단열 및 보온재는 내화성, 내구성 및 내부식성이 있는 자재이어야 한다.

다. 창호 등 건물의 모든 부위는 결로가 발생하지 않도록 설계한다.

라. 에너지를 절약할 수 있는 구조로 설계하고, 건축부위별 열관류율은 관계법규에서 정하는 수치 이하가 되어야 한다.

6. 방음(차음)성능

가. 실 및 용도별로 적정한 음향조건이 갖추어지도록 필요한 차음, 흡음, 방음 조치를 하여야 한다.

나. 바닥은 바닥 충격음이 하중에 전달되지 않도록 설계한다.

다. 각실 간에는 인접실의 음이 서로 전달되지 않도록 차음 구조로 하여야 한다.

7. 방수성능

가. 건물의 모든 부분에서 누수 및 흡수되지 않는 구조이고, 구조물의 방수, 결로 및 배수에 대하여 합리적인 방법으로 설계한다.

나. 방수재료 및 구조는 충분한 내구성이 있고, 구조체의 신축 균열 등에 적응할 수 있는 것으로 한다.

다. 배수는 가장 안전한 경로를 선택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가 막히더라도 넘치지 않도록 충분한 여유를 가져야 한다.

라. 화장실, 주방, 물탱크실, 공조실 등 물의 사용과 관련된 실은 방수 및  배수가 완전하여야 한다.

8. 실내 환경 및 환기

가. 관련실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치 구성한다.

나. 각 실은 기본적으로 자연채광이 되도록 하고 적정 조도가 확보되도록 인공조명을 계획한다.

다. 각 실은 실의 용적 또는 최대 사용인원수 및 용도에 적합한 환기시설을 갖추어야 한다.

라. 각 실은 조망성을 고려하여 계획한다.

마. 각 실별 온도 조절이 가능하도록 계획한다.

9. 창 호

가. 창호는 여닫음이 경쾌하고 하중이나 외력(풍압 등)에 의한 변형이 없는 안전한 방법으로 설계한다.

나. 창호는 외력에 의한 누수 및 소음 등에 대한 차단성능이 우수한 방법으로 설계한다.

10. 정보통신 성능

가. 정보통신, 사무자동화, 시설관리시스템 상호간 유기적으로 운용되도록 통합관리시스템을 구축한다.

나. 향후 용량 증설에 대비한 확장성을 고려하여 설계에 반영한다.

11. 미관

가. 건물의 외관, 옥외시설물 및 조경은 주위 경관과 어울리게 하여야 한다.

나. 건물의 실내 및 옥외 시설물에 대한 환경색채계획을 일관성 있게 설계에 반영하여야 한다.

1) 내, 외부 건축물 이미지 통합 계획

2) 외부공간의 포장패턴 디자인 및 재료 계획

3) 일반 시설물 디자인 및 배치 계획

12. 방범 및 보안

가. 주출입구, 저온저장고 등 주요 장소에는 보안시설(CCTV)설비를 갖추도록 계획한다.

13. 유지관리

가. 시설 및 각종 설비는 유지관리가 용이하도록 하고, 사용자재는 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들고 보수자재 확보가 용이한 것으로 한다.

나. 배관, 덕트 등의 유지관리를 위한 충분한 공간을 확보하여야 한다.

다. 각종 시설에 대한 관리 및 보수용 점검구, 통로 등 작업공간을 확보한다.

라. 향후 건물 유지보수의 효율성을 고려하여 설계하여야 한다.

마. 쾌적한 건물환경의 지속적인 유지와 보수를 고려하여 시공성 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

Ⅳ. 사전조사

1. 설계 착수에 따른 계획부지에 대한 아래사항에 대하여 사전조사 및 평가를 실시하여 설계에 반영 하여야 한다.

가. 지반조사

나. 각종 대관 인허가 여건조사

다. 부지주변 도시 기반시설(시수, 하수, 통신, 전력 등)

라. 기타 설계 및 공사와 관련되는 사항 등

2. 지반조사는 지형 및 지질조사를 비롯한 각종 탐사 등을 실시하고 그 보고서를 제출하여야 한다.

3. 지반조사 결과에 따라 기초설계에 반영하고 가급적 설계변경 사항이 발생하지 않도록 한다.

4. 부지주변 구조물에 대한 구조안전성 등을 평가하여 공사로 인한 영향이 최소화 되도록 보강계획 등을 수립하여 설계에 반영한다.

Ⅴ. 성과품 제출

1. 공통

가. 설계도는 Auto CAD로 작성하여 CD로 제출하며, 각종 인허가, 심의 등에 관련된 대관 심의가 완료된 것이어야 한다.

나. 시방서, 내역서, 일위대가표 등은 Excel 프로그램으로 작성하여 CD로 제출한다.

다. 본 장에 표기된 제출 부수와 인·허가 제출용 설계도서는 별도로 한다.

2. 기본설계도서(5부)

가. 인허가 절차 및 제반 법규검토 자료

나. 계획부지(건물 및 기반시설 포함)에 대한 사전조사 보고서

다. 부지이용계획(대지분석, 주변현황 등) 및 건물 배치계획

라. 대지 내 기반시설 현황 및 활용 계획안

마. 용도별 시설배치 및 동선계획

바. 건물 외관계획(외장재료 비교 분석 포함) 등

사. 건물 및 옥외 공간 배치, 입면, 단면, 평면설계 등

아. 각 공종별 설명서 및 계획서

자. 기계, 전기, 통신, 소방 설비, 가스 계획

차. 조경, 토목계획

카. 지질조사서

타. 각 공종별 개략 시방서 및 공사비 개산서

파. 건물 외부 투시도 및 사진

3. 최종설계도서(5부)

가. 설계 설명서(각 분야별  전체)

나. 설계도면 (공종별 평면도, 입면도, 상세도, 전개도 )

다. 공사비명세서(산출근거서, 일위대가표, 단가조사 및 견적서 포함)

라. 구조계산서, 흙막이 구조계산서, 토적계산서, 부하계산서, 조도계산서, 열량계산서 등 각종 계산서

마. 예정공정표 (PERT/CPM에 의한 Network 공정표) - 전체 공정 포함

4. 조감도(1부)

5. 기타 감독관이 요구하는 자료

각종 자료 및 행정절차 이행상 추가로 소요되는 상기 자료에 대하여  계약상대자는 발주자의 요구에 따라야 한다.

6. 설계도서 작성 시 유의사항

가. 설계착수에 따른 계획부지에 대한 아래사항에 대하여 사전조사 및 평가를 실시하여 반드시 설계에 반영하여야 한다

1) 부지현황측량(토목설계분)

2) 지반조사

3) 부지주변 도시기반시설 현황

4) 인허가 여건조사

5) 부지 내 조경 수목 등 지장물 현황

6) 기타 설계 및 공사와 관련되는 사항

나. 설계도서는 내용을 상세히 파악할 수 있도록 세밀히 작성하여야 하며 각   단계별 설계도서 심사시의 조정보완 요구사항은 즉시 보완하여 제출하여야 한다.

다. 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 토목, 조경 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은 관계법령 및 기준 등과 본 설계지침서의 기준이 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

라. 설계계획서 및 설명서는 책자로 제출하고, 설계 보고 및 평가를 위한 자료는 컴퓨터 영상프로그램(POWER POINT 등)으로 작성하여 별도 제출한다.

마. 설계도서 작성 시 특정자재에 대한 상호 명기 등은 원칙적으로 금지하며 고가의 자재를 사용할 경우에는 발주자의 승인을 득한 후 명기 요함.

바. 공사예정 공정표는 공사규모 및 상품화설비설치 공정을 고려하여 각 공정별 소요기간을 검토한 공정표를 작성 제출한다.

Ⅵ. 기  타

1. 설계자는 발주자의 협조를 받아 건축 인.허가를 책임지고 취득하여야 하며 설계지침서에 따른 효율적인 연면적을 확보할 수 있는 설계 안을 제시하여 협의 후 인. 허가 추진한다.

2. 건축물의 배치, 동선, 외관등 세부 설계방향은 “컨설팅완료보고서”를 참조하여 설계한다.

3. 공사에 따른 민원발생 및 안전사고 방지를 위하여 필요한 시설을 계획한다.

4. 계약자는 설계용역 단계별로 작성된 설계도서에 대하여 발주자 및 안동시 검토를 받아야 하며, 검토결과 조정보완 요구사항에 대하여는 설계에 반영 하여야 한다.

5. 공사비 명세서 작성기준

가. 기술사항 : 보편타당성에 입각한 공인기준 적용

나. 물량산정 : 설계 당시 시점 정부 발행 표준품셈 적용

다. 단가적용(A, B, C, D항 순으로 적용)

A. 조달이 가능한 품목은 조달청 홈페이지의 가격정보 자재단가를 적용

B. A항에 게재되지 않은 자재는 공신력 있는 물가지(물가정보, 물가자료 등) 가격을 2개 이상 비교하여 최저단가 적용

C. A항 및 B항에 게재되지 않는 자재는 업체견적을 2개 이상 제출받아 최저단가 적용

D. A항, B항에 게재된 단가라도 실제가격과 현저한 차이가 있을 시 실제가격을 조사하여 적용

♣ 단가비교표 양식예시 ( 다음 서식에 의거 조사 후 제출 )

품 명	규 격	A		B		C		적용단가		비고
		단가	PAGE	단가	PAGE	단가	PAGE	단가	자료

라. 노임단가 : 설계 당시 시점의 정부 노임단가를 적용

마. 내역서작성 : 공사내역서는 일위대가 방식으로 작성.

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경비		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액
배관용탄소강관	D 15	M	10	1,200	12,000	10,358	103,580			일위대가

6. 유의사항

가. 설계도서, 시방서, 공사비 명세서의 납품은 우선 각 5부씩을 납품하여 심사를 받도록 하고 수정 정리 후 전량 납품한다.

나. 기본 및 실시설계의 설명서는 별도 컴퓨터 영상프로그램(POWER POINT)으로   작성하여 보고회 개최한다.

다. 설계를 납품 시에는 설계도서 검토를 원활히 할 수 있도록 아래 검토서를   작성 제출하여야 한다.

1) 관련법규 검토서

2) 구조검토서등 각종계산서

3) 재료 및 특기시방 검토서

4) 공사범위 구분표

5) 자재 및 공법 선정 검토서

6) 공사기간 산정 검토서

7. 특기사항

가. 건축허가

설계자는 발주자의 협조 하에 건축허가를 책임지고 취득하여야 한다.

나. 자문 및 협의

설계자는 공사 설계에 대하여 발주자의 수시 협의 및 자료 제출에 적극 협조하여야 한다.

다. 공사기간

설계자는 확정된 규모에 의하여 소요공사 기간을 검토한 후 공사예정 공정표(Network 공정표)를 작성 제출하여야 함

라. 업무보고 및 회의

1) 설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

2) 설계착수 시

설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류를 2부 제출하여야 한다.

가) 착수계 1부

나) 책임기술자 선임계 1부

다) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

라) 과업수행계획서 1부

마) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

바) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 예정 책임기술자 명단, 업무내용, 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

사) 설계용역 예정공정표(기본설계, 설계의 납품예정일자 명시) 1부

아) 계약서 사본 및 계약금액에 대한 산출내역서 1부

자) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

차) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

마. 업무보고

1) 주간공정보고 : 매주 발주자가 지정하는 요일에 붙임 양식에 의거 제출한다.

2) 월간공정보고 : 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

3) 수시보고 : 설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 제출하여야 한다.

바. 업무회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다.

단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 설계지침서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

2) 수시회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 기본설계, 설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

Ⅲ	분야별 설계지침

1. 건축계획

(1) 용도별 계획

1) 동선체계는 기본적으로 작업자, 부자재 동선으로 구분하여 계획하고 상호  연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 설계한다.

2) 계획부지 내에서 각 동선을 합리적인 체계를 갖도록 계획한다.

3) 각 실별 기능에 맞는 공간 배치와 이동통로의 특성에 맞는 면적을 계획하여 설계한다.

4) 용도별 면적

○ 실별 규모 : 농기계수리, 경정비, 자재판매점, 사무소, 창고

용 도	면 적	비고
농기계수리 경정비 사무소 자재판매점 창고	378㎡ 121㎡ 711㎡ 185㎡ 1,363㎡	(신축) 경상북도 안동시 풍산읍 소산리 산58-6 임 외 2필지

(2) 일반사항

가. 배치계획

1) 건물 및 옥외시설 배치계획

가) 부지현황과 기존 기반시설 등의 여건을 종합적으로 검토하여 배치계획을 수립한다.

나) 부지 내 진입구는 부지주변, 내부교통흐름 및 이용자 동선에 지장이 없는 위치에 설치한다.

다) 계획부지 내에서 주변 환경 및 기존건물 현황을 파악하여 건립건물 및 옥외시설 등을 합리적으로 계획하고 상호간 적절한 연계를 통하여 전체적으로 조화되도록 계획한다.

라) 건물의 배치계획 시 계절적 풍향, 풍속 등을 조사하여 온도차를 이용한 자연풍 환기방식을 적용하여 에너지 절감형 건물이 되도록 계획한다.

2) 동선계획

가) 본 건물은 각종 기능별 실의 상호간 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 계획한다.

나) 차량 동선은 보행 동선과 간섭되지 않도록 하며 사용자가 편리하게 이용하도록 계획한다.

3) 부대시설물

가) 구내포장, 배수시설, 정화조 등은 주변시설 및 주위환경을 감안하여 경제적이며 효율적으로 계획한다.

나) 공장에서 배출되는 오·폐수는 군하수관로에 연결하는 것으로 설계에 반영한다.

나. 외관계획

1) 건물 외관은 고객에게 밝고 친밀감을 줄 수 있도록 디자인하고 산지유통센터의 이미지를 반영할 수 있게 설계한다.

2) 주변 경관과의 조화를 고려하고 현대적 균형미를 이루도록 한다.

3) 건물의 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열손실 방지 및 소음 등의 영향이 없도록 설계한다.

다. 평면계획

1) 실의 형태는 그 실의 용도에 적합하게 설계한다.

2) 실내 공간 배치계획 시 옥외공간과의 연계성을 최대한 활용토록 한다.

3) 각 실별 실구성, 면적, 천정고, 마감재료, 필요설비에 대한 사항을 설계도서에 명확히 표현한다.

4) 적절한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하고 쾌적하고 밝은 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

5) 각 용도별로 상호 독립된 공간을 확보할 수 있도록 층별, 영역별로 계획하고 상호 유기적인 연계가 가능하도록 설계한다.

6) 기능별 조닝(ZONING)을 통해 서로 독립되면서 상호 연관성을 가질 수 있도록 수직 동선의 원활을 기하여야 한다.

7) 각각의 용도별 기능에 대하여 이용 동선 및 기능별 연계성을 고려하여 평면을 구성한다.

라. 단면계획

1) 층고는 해당 층의 가장 높은 천정고, 보높이, 공조덕트의 높이, 천정틀 및 마감두께, 각종배관과 여유높이 등을 감안하여 산정하되, 경제성을 고려하여 계획한다.

2) 향후 확장공간의 바닥구조는 시설용도에 적정하도록 계획한다.

마. 구조계획

1) 일반사항

가) 구조설계는 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상 또는 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 한다.

나) 공사기간을 단축하고 투자비를 절감할 수 있는 구조로 하며, 특수공법을    적용할 경우에는 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료 및 특허권 사용에 관련된 자료를 제시하여야 한다.

다) 구조 형식 및 단면의 크기 등은 시공성 및 미관을 고려하여 정한다.

라) 구조 설계는 법령 등의 규정에 의하여 자격이 있는 자가 하여야하며, 작성한 도서에 서명, 날인하여야 한다.

마) 구조의 안전 성능은 법령 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

바) 일반 구조기준상의 제반하중에 적합하게 하고 구조물에 균열이 발생하지 않도록 설계 시 고려하여야 한다.

사) 본 건물의 구조방식은 건물의 기능 및 용도를 고려하여 설계자가 제안한다.

아) 건물의 기능, 규모, 시공성, 경제성(공사비 절감등), 안전성을 고려하고 유지관리에 유리한 구조로 계획 요함

자) 기초방식은 지질조사서를 토대로 하여 가급적 공기가 빠르고 부동침하 현상이 없는 기초로 하되 시공 시 변경사항이 발생하지 않도록 사전에 지질조사 결과를 면밀하게 검토하여 설계 요함

차) E.J의 여부는 검토하여 설계에 반영한다.

2) 적용 법령 및 시방

가) 건축법 및 동법 시행령, 시행규칙, 건축물 구조기준 등에 관한 규칙

나) 철근콘크리트구조 설계는 대한건축학회편 극한강도 설계법 적용하고 철골 구조는 대한건축학회편 강구조 계산기준 및 동해석에 의하여 설계하며, 기타 설계법을 적용할 경우에는 사유를 명시한다.

다) 적용시방은 대한건축학회편 "건축공사 표준시방서" 및 건설교통부 "철근콘크리트 설계 편람" "철근콘크리트 표준시방서" 적용

3) 구조계획

가) 모든 구조부재의 배치는 합리적이어야 한다

나) 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내역을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

다) 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.

라) 처짐 등의 변형을 최소화시킬 수 있는 구조로 한다.

마) 안전성 확보를 위한 기준을 세워 설계에 반영토록 한다.

바) 비정형구조물의 경우 응력집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식의 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.

사) 기둥스팬은 동선 및 편의성 등을 종합적으로 고려하여 설계한다.

아) 향후 증축이 가능한 구조로 계획한다.

4) 지반면 및 1층 바닥높이

가) 지반면은 인접도로면 높이보다 낮아서는 안 되며, 지표면의 배수가 잘 되   도록 설정한다. (단, 지형여건에 따라 부득이한 경우는 제외할 수 있다.)

나) 1층 바닥높이는 우수의 침투 및 장애자 시설 기준에 적합할 수 있도록 고려하여 설정한다.

다) 지형을 고려하여 영역을 배치하고, 각 시설과 외부공간의 연계성 및 접근이 용이하도록 계획한다.

5) 층고

가) 층고는 해당층의 가장 높은 천정고, 보 높이, 공조덕트의 춤, 천정틀 및 마감두께, 각종 배관과 여유높이 등을 감안하여 산정하되, 경제성을 고려하여 계획한다.

나) 층고는 각 실의 규모 및 용도에 따라  이용에 지장이 없도록 계획한다.

바. 재료계획

1) 일반사항

가) 질감이 좋고 미려하면서 내후, 내구적이며 오염이 잘되지 않는 재료를 선정토록 한다.

나) 색채는 가급적 싫증이 나지 않는 혼합색을 사용토록 하고 건물에 대한 종합적인 색상 계획을 수립하여 제출한다.

다) 보편적이고 유지 보수가 편리한 재료를 선택한다.

2) 내장재료 계획

가) 단열성능이 요구되는 실은 단열성능이 우수한 자재를 사용하도록 한다.

나) 실내 차음 및 방음이 요구되는 실은 실내음이 반사되지 않고 흡음이 용이한 자재를 사용하도록 한다 .

다) 미려하면서도 내구성이 있고 유지관리 용이한 자재로 설계 요함

라) 에너지 절감을 위하여 벽, 천정, 유리창 등에 적법한 단열공법을 적용하여 설계 요함

마) 실의 용도변경, 가변성이 예상되는 실은 경량칸막이를 설치하여 추후 변경이 용이하도록 설계 요함

바) 방범이 요구되는 장소의 외부창은 방범에 유리한 설비를 설계 요함

사) 화장실 등 청결과 양호한 위생상태가 유지되어야 하는 외기 창호에는 방충 및 방서 계획을 설계 요함

아) 방수공법은 건물여건에 적합하면서도 완벽한 공법으로 설계 요함

자) 일반적으로 사용하지 않는 특수자재를 선정할 경우에는 반드시 발주자와 협의하여 설계 요함

3) 기타

가) 각 공종별로 주요 사용자재에 대한 자재비교 검토서(공법명기, 설계자 검토의견 첨부)를 제출토록 하시기 바람

나) 고효율 에너지 절감형 시설로  검토한다.

다) 본 공사 설비(기계설비, 전기, 통신, 소방 등)부분의 지급자재 등 주요자재 설계시에는 설계도면과 시방서에 부합하는 가격조사서(견적서)에 의거 설계 요함

사. 토목계획

1) 일반사항

가) 설계범위는 부지정지, 오ㆍ우수용 배수, 포장, 흙막이, 구조물 등이 포함된다.

나) 본 부지는 주변건물의 토지이용현황 및 제반 여건상 기존의 기반시설의 이용과 상호 연계가 원활하도록 설계한다.

다) 설계도서는 관계법규에 의한 인. 허가 등에 문제가 없도록 작성하여야 하며, 각종 제반 관련법규 및 규정과 시방서 등 해당조항에 의하여 설계한다.

라) 건축물과 최대한 조화로운 부지 계획고를 선정한다.

마) 구조물 등은 건물, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.

바) 하수의 배수방식 및 배수위치는 기존의 배수시설현황 등을 조사하여 배수가 원활하도록 계획한다.

사) 주변 지형여건과 부합되고 지반조사 결과를 고려하여 유지 및 관리에 편리하고 경제적인 계획을 수립한다.

2) 지반조성

가) 지반선 및 건물 지반면은 기존의 부지현황을 사전 조사하여 합리적인 방안으로 제시한다.

나) 건물 및 대지조성 계획고는 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하고 인접지역에 피해가 없도록 설계하여야 한다.

다) 대지조성 시 부득이 단을 지는 경우에는 옹벽 또는 조경석 설치 등 경제성 및 미관을 고려하여 필요한 조치를 하여야 한다.

라) 단지 횡단면은 적정 간격(20m정도)으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물 설치 등으로 필요한 경우 중간점 단면을 작성한다.

마) 토공사로 인한 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전하도록 충분히 검토하여 설계하여야 한다.

바) 대지성토가 필요한 경우 최단거리의 주변 토사 채취장을 조사하여 적용한다.

3) 터파기 및 흙막이 가시설

가) 흙막이, 차수, 지반보강공법 등은 경제적이고 신뢰성이 높은 공법으로 하여야 한다.

나) 터파기로 인하여 기존 건물에 손상을 주지 않도록 충분히 검토하여 공법 및 안전대책을 반영한다.

다) 굴착단면, 굴착방법, 지반보강공법을 충분히 검토하여 안전하며 경제적인 흙막이 공법을 제시해야 한다.

라) 지반굴착에 따른 탈수로 인한 주변 건물 및 구조물의 침하방지를 위해 계측장비를 설치하여 지하수위 및 주변지반의 변동을 관측할 수 있도록 설계에 반영한다.

마) 공법별 접속부위에 대한 정밀시공이 되도록 상세도를 작성한다.

바) 지하굴착으로 인한 주변 민원사항이 발생하지 않도록 설계한다.

사) 흙막이 가시설 구조는 지반조사 자료를 정밀 분석하여 지반의 특성 및 지하수위 등 주변여건을 충분히 고려하여 안전성이 확보되도록 한다.

아) 가시설은 주변 침하, 지반이동에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계되어야하며 필요에 따라 지반보강공법, 차수공법 등의 사용을 고려한다.

자) 가시설 설치도면은 평면도, 구간별 단면도, 특수구간 단면도, 세부상세도, 차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.

차) 지질조사 결과 암반이 표출될 경우 발생하는 암의 유용계획을 수립하여 설계하여야 한다.

4) 부지포장

가) 부지 내 도로 및 주차장 포장형식은 여러 가지 방법을 비교 검토 후 기능성 및 유지관리성 등을 충분히 검토 후 적의 결정하여 설계토록 한다.

나) 부지 내 주차시설은 주차장법 및 도로의 구조 시설기준에 관한 규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

5) 우수. 오수용 배수시설

가) 하수도 계획은 국토해양부 제정 하수도시설 기준에 의하여 설계한다.

나) 부지 내 오수 및 우수관로는 분리하여 설계하여야 한다.

다) 배수조건 및 부지 구배는 지형조건을 고려하여 결정하며 부지 외곽의 우수가 부지내측으로 배수되지 않도록 하고 필요시 경계부 측구를 설치하고 부지 배수에 만전을 기해야 한다.

라) 우, 오수관은 일직선으로 매설토록 계획하며 동결심도, 차량통행 등을 고려하여 적정한 매설깊이를 확보하도록 설계한다.

마) 맨홀은 하수관로 기점, 합류점, 구배전환점, 관경 변화지점에는 반드시 설치하여야 하며 맨홀 관경별 최대 간격과 맨홀 규격은 국토해양부 하수도 시설기준에 적합하도록 설계한다.

바) 오수처리는 건물에서 오수가 배출되는 지점에서 오수받이 및 오수맨홀을 설치하여 오수본관에 연결되도록 설계한다.

6) 측 량

가) 조사측량은 공공측량의 작업규정기준 등 제 규정에 준하여 정밀하게 실시 하여야 하며 사전에 현지를 답사한 후 “발주자”과 협의하여 결정한다.

나) 지형측량은 모든 기준점 등을 조사하여 표시, 기록한다.

다) 현황측량은 도면에 도로, 하수도, 급수 등 설계에 관계되는 모든 자료가 수록되어야 한다.

라) 현황측량이 완료된 후 “발주자"의 검토를 득한 후 도로포장, 하수도, 급수 시설, 조경공사, 기타부대시설을 계획한다.

7) 제반조사

설계계획 조사는 현장답사를 통하여 현지의 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 구조물, 배수 등 제반 현장조사를 실시하여 설계 기초 자료로 이용한다.

8) 구조계산

가) 구조계산은 합리적이고 정밀성을 기할 수 있도록 고려하여야 한다.

나) 전산프로그램의 타당성을 공인여부와 해석방법, 적용하중 등을 고려하여 검증된 프로그램을 활용하고 단계별로 구체적인 과정을 서술하고 해석된 결과에 의해서 근사적 방법에 의한 검토와 확인 방법을 통하여 최적의 결론을 도출해야 한다.

9) 토목설계

가) 설계조건의 검토

① 현황 및 주변여건을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

② 설계의 기준을 설정하여 감독원의 검토를 받아 설계에 반영해야 한다.

나) 토 공 설 계

① 부지조성은 기본계획 및 현지현황, 지형측량을 감안, 토량 이동이 최소가 되도록 합리적으로 수립하고 정지계획은 배수계획을 감안 주변지역과 연계하여 합리적으로 수립하여야 한다.

② 부지 내 토량 계산방법은 특별한 지역을 제외하고는 양단면 평균법을 원칙으로 하며, 부지 횡단면은 20Μ간격으로 작성하고 지반의 기복 및 구조물 설치에 있어 필요한 경우 중간점의 단면을 두되 원지반 및 계획고의 구배가 일정할 경우 감독원과 협의 후 조정할 수 있으며 가능한 한 전산에 의한 단지토량 계산방법을 강구하여야 한다.

③ 각 블록 및 부지 외각, 도로 시종점 및 교점, 중요구조물의 좌표를 기입하여야 하고 면적산정은 좌표계산에 의하며, 굴곡 및 곡선부분은 삼사법에 의하여 산정한다.

④ 비탈면은 비탈면 안정과 토지이용도 및 배수처리 등을 감안하여 구배를 결정하고 시공성, 안정성, 경제성을 고려한 법면보호 공법을 비교 검토한 후 설계하여야 한다.

⑤ 도로와 부지가 접하는 부위는 가급적 단차를 두지 않아야 하며 부득이한 경우에는 차량의 진입이 가능하게 단차를 두어야 한다.

⑥ 부지 내 계획 건축물의 배수 및 각종 기반시설을 감안 부지계획을 수립하여야 한다.

다) 배수 설계

① 기본계획에 의하여 실시, 건설부제정 하수도시설 기준 및 지자체 하수도 정비 기본계획 등에 의하여 오우수량 측정과오 ,우수분류방식 및 유량계산을 실시하되 설계 및 사업시행에 지장이 없도록 관계기관과의 사전 협의에 만전을 기하여야 한다.

② 본 지구 수위의 수분기록 자료를 수집 분석하고 인접지역의 유수소통 및 하류지역 침수, 인접지 개발계획 등을 감안 관계기관과 협의하여야 하며 하수배출로 인한 피해를 극소화 및 민원이 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

③ 하수배제방식은 서안동농협 및 관계기관과 사전협의하여 그 결과에 따라 설계한다.

④ 하수처리를 위하여 현지여건과 장래 확장분을 충분히 고려하여 경제적이고 효율적인 배수처리 방법을 검토하여 계획되어야 한다.

⑤ 하수도 구배는 토사 및 잔조물의 침체가 없고 세굴이 없도록 역수 영향 등을 세밀히 검토한 후 결정하여야 한다.

⑥ 하수도의 형상 및 관종은 합리성 및 경제성을 감안하여 검토하여야 한다.

⑦ 하수도의 기초공은 하중조건, 매설심도, 토질조건, 사용관의 외압강도 등을 고려하여 구조계산을 실시한 후 기초 설치여부, 기초형식 등 관의 침하 등을 감안하여 설계하여야 한다.

⑧ 우수는 자연지형을 이용 측구로 연결 방류토록하고 우수배제 유역도를 1/5,000이상 도면에 표기하여 관망계획 도와 함께 수리계산서에 첨부 제출하여야 한다.

마) 상수도 설계

① 상수는 경상북도 상수도정비기본계획을 검토 반영하여 설계하여야 한다.

② 기본계획에 의하여 실시하되 건설부제정 상수도 시설기준 및 자치단체의 상수도 조례 등을 검토하여 경상북도청과 협의 후 결정하여야 한다.

바) 구 조 물 설 계

① 구조계산서와 설계도의 단면 및 수치가 통일되어야 한다.

② 구조계산 전산 시 입력 data 명기 및 결과가 검토되어야 한다.

- 프로그램 타당성, 공인여부, 해석방법, 적용하중 등 단계별 구체적 과정 설명

- 해석결과에 대한 수계산이나 근사적 방법에 의한 검토가 확인되어야 함.

③ 구조계산에 의한 안전도를 검토한 후 설계하여야 한다.

④ 구조물 설계에 있어 설계도면상에 설계법(허용응력 설계법 또는 강도설계법)을 명시하여야 하며 필요시 시방 내 용도 주기하여야 한다.

⑤ 구조계산서 전산을 활용할 경우는 다음 항목을 제출하여야 한다.

- 업무처리 흐름도 ∙ 입력자료(디스켓 포함) ∙ 출력자료(디스켓 포함)

사) 기타 시설 설계

① 상기 내용에 표기되지 아니하여도 기타시설의 설치가 요구되는 경우에는 관계기관의 협의결과를 검토하여 감독원과 협의 후 결정하여야 한다.

② 추후 계획 예정부지와 금차 신축부지 경계에 적합한 부대토목을 계획한다.

2. 기계설비계획

(1) 일반사항

가. 설비설계 기본지침

1) 기본방향

설비설계는 건축물에서 생활을 영위하는 인간의 활동에 편리하고 경제성, 유지관리, 실내환경, 안전시설, 운용계획 등을 고려하여 건축목적에 적합한 설비계획을 기본으로 한다. 건축물이 설치되는 부지의 자연환경, 부지조건, 건물용도, 건축구조, 건물관리, 예산조건 등 건축조건에 적합하게 계획하며 아래를 참조하여 설계한다.

가) 경제성

고효율 장비 설치, 에너지 절감형 자재 및 시스템 선정으로 초기투자비 및 내용년수 측면 등에서 충분한 경제성 검토를 통하여 합리적인 시스템으로 계획하여 설계한다.

나) 유지관리

기기 및 장비의 중앙 집중화 및 효율적인 제어방식으로 건물관리의 편의성, 개․보수 및 점검, 설비배관 증설 등 향후 시설보완 등 유지관리 측면에서 용이한 시스템으로 계획하여 설계한다.

다) 실내 환경

각 실의 용도에 적합한 실내 환경 조성을 목적으로 충분한 환기가 유지되는 공조방식을 채택하고, 위생적인 환경 유지와 소음․진동 및 공해방지 등으로 쾌적한 실내 환경이 유지 될 수 있는 시스템으로 계획하여 설계한다.

라) 안전시설

화재 등 각종 재해로부터 안전한 설비계획이 될 수 있도록 안전대책을 계획하여 설계 한다.

마) 운용계획

사무실동과 창고동의 특성을 감안한 효율적인 설비계획, 용도별, 시간대별 운용에 적합하게 계획하여 설계한다.

바) 관계법령

관련 법령에 맞게 합리적인 기계설비 설계를 계획하여 설계한다.

2) 관계법령

합리적인 설비계획이 될 수 있도록 관련법규를 면밀히 검토하여 설계한다.

구 분	설계기준	관련법규
열원설비	ㅇ 에너지의 합리적 이용을 위한 설계기준	ㅇ 건축물의설비기준등에관한 규칙
냉난방 공조환기	ㅇ 열손실방지 등의 조치 ㅇ 개별관리 공기조화설비	ㅇ 에너지이용합리화법 ㅇ 건축물의냉방설비기준에대한 설치 및 설계기준
에너지절약	ㅇ 건축물의에너지절약설계기준 ㅇ 인버터, 고효율모터 등 설치	ㅇ 건설교통부고시 ㅇ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정
위생설비	ㅇ 음용수용 배관설비의 설치 및 구조 ㅇ 음용수에 사용할 수 있는 배관재료 ㅇ 저수조설치 및 유지관리, 공중이용시설의 위생관리 ㅇ 오수처리시설 ㅇ 냉각수계통 레지오넬라균증	ㅇ 건축물의설비기준등에관한규칙 ㅇ 수도법 ㅇ 공중위생관리법 ㅇ 오수분뇨에 관한 법, 하수도법 ㅇ 전염병예방법
소방시설	ㅇ 소화방재시설	ㅇ 소방기본법 ㅇ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법
환기설비	ㅇ 실내환기	ㅇ 건축물의 설비기준등에 관한규칙
안전시설	ㅇ 도시가스	ㅇ 도시가스사업법

나. 냉․난방설비

1) 냉․난방장치 외기 및 실내 온․습도 설계기준

가) 실내 온․습도기준 (기계부문의 권장사항)

구 분	난 방	냉 방
	건구온도(℃)	건구온도(℃)	상대습도(％)
사무실	20	26	60
- 사무실은 업무효율을 감안하여 실내온도를 설계한다.

2) 냉․온열원의 계획

가) 건물의 용도, 규모, 부하특성 등을 감안한 장비의 대수분할 등 부분 부하에 대처하고 효율을 향상시키는 방식으로 계획하여 설계한다.

나) 에너지원의 경제성, 환경성, 기술성, 효용성 등을 검토 분석한 후 설계한다.

다) 정부의 에너지절약정책 및 유지관리비 절감을 위한 에너지절약시설을 검토  분석한 후 설계한다.

3) 냉․온 열원설비

가) 사용에너지의 안정성, 경제성, 법적 제한 등을 검토하여 설계한다.

나) 부분부하에 대응할 수 있는 기기 선정 및 적정한 대수 분할 등을 계획하여 설계한다.

다) 보일러는 소음․진동이 없고 설치면적을 최소화 할 수 있으며, 용량제어성이 우수한 기종으로 선정하고, 급탕공급이 가능한 방식으로 계획하여 설계한다.

다) 경제성이 우수하고 유지관리가 용이한 시스템으로 계획하여 설계한다.

라) 유지관리비가 저렴한 고효율 열원기기의 선택하고 계획하여 설계한다.

마) 열원기기의 최적기동, 용량제어 등을 계획하여 설계한다.

다. 공조설비

1) 공조설비계획

가) 공조설비는 중앙공조방식과 개별공조방식을 비교 검토하여 효율적인 냉․난방식이 되도록 계획하여 설계한다.

나) 공조계획에서의 실내 환경 기준 : 일반적으로 기본적인 설비공조 계획에서 실내 환경은 관계법령에서 정한 바와 같이 설계한다.

다) 적절한 공조 구획으로 에너지 손실을 억제하도록 계획하여 설계한다.

라) 각 실별 온도 조절이 가능하도록 계획한다.

마) 자연환기 및 외기냉방방식 등의 도입으로 최소한의 에너지로 최적의 효과를 누릴 수 있도록 계획하여 설계한다.

2) 공기조화기기

가) 공조용 송풍기는 효율이 높은 것을 계획하여 설계한다..

나) 공조용 모터는 에너지 절감을 고려하여 고효율기기로 계획하여 설계한다.

다) 공조기와 공조 덕트는 소음과 진동을 방지할 수 있는 장치로 계획하여 설계한다.(소음기, 소음엘보, 잭업 등)

라) 각 실별, 계통별 온도조절장치 등으로 과열 및 과냉 방지를 계획하여 설계한다.

마) 폐열 회수형 환기장치 도입 등으로 에너지 손실을 억제할 수 있는 시스템으로 계획하여 설계한다.

3) 시설투자의 전생애비용(Life Cycle Cost) 검토

가) 시스템결정에는 시설투자비와 내용연수, 에너지비용 및 유지관리비를 종합 비교하고 타당성, 적합성 등을 계획하여 설계한다.

4) 에너지절감 계획

가) 인버터, 고효율모터의 등의 고효율 기기설치, 장비의 용량제어 및 대수제어, 절수, 절전형 방식으로 설계하여 에너지 절약이 가능한 시스템으로 계획하여 설계한다.

라. 환기설비

1) 환기설비 계획

가) 공기운송시스템은 부하특성을 충분히 검토하여 설계하고 부하변동에 따른 풍량 제어방식을 계획하여 설계한다.

나) 냉풍이 통과하는 덕트는 외부로부터 온․습도 의한 단열효과가 저하되지 않도록 계획하여 설계한다.

다) 덕트 보온재 두께는 덕트 내의 유체온도, 외부온도, 덕트의 전열특성 등을 고려하여 가장 경제적인 것이 되도록 계획하여 설계한다.

라) 덕트는 공기를 오염시킬 우려가 없는 재료를 계획하여 설계한다.

마) 환기 시 열회수가 가능한 폐열 회수형(전열교환기 등) 환기장치를 검토하여 신선외기의 공급되도록 계획하여 설계한다.

바) 개별실(사무실, 회의실, 화장실, 기계실, 전기실 등)은 전용의 배기시설을 계획하여 설계한다.

사) 모든 송풍기 및 덕트는 소음과 진동을 방지할 수 있는 장치로 계획하여 설계 한다.

아) 급기구의 외기 취입구와 외기와 면한 급기구 및 배기구에는 빗물의 유입과 쥐, 벌레 등 이물질의 유입을 방지하는 시설을 계획하여 설계한다.

자) 유지관리 및 보수점검이 필요한 장소에는 천정 및 적정한 위치에 점검구를 계획하여 설계한다.

차) 화장실, 특수실(탕비실 등) 은 냄새가 역류, 체류하지 않도록 환기 계획하여 설계한다.

마. 위생설비

1) 급수․급탕 설비

가) 급수․급탕 공급방식은 시 수압을 이용한 급수방식, 고가수조 방식 등의 운송동력이 가장 적게 들고 수질오염방지 및 유지보수가 용이한 방식을 계획하여 설계한다.

나) 급수․급탕 용량 산정은 기구수에 의한 방법과 인원수에 의한 방법을 비교 검토하여 큰 것으로 산정 충분한 급수량을 확보하고 최상층에는 수압부족현상 등이 발생하지 않도록 계획하여 설계한다.

다) 음식물 처리시설은 음용수를 위한 급수처리시설을 계획하여 설계한다.

라) 급수사용이 필요한 장소에는 급․배수설비를 계획하여 설계한다.

마) 위생기구는 절수형 세정방식 적용으로 에너지 절감이 가능한 방식으로 계획하여 설계한다.

2) 배수․통기설비

가) 배수배관은 소음이 없고 유지관리 보수가 용이한 재질의 이음방식으로 계획하여 설계한다.

나) 우수배관이 설치되는 곳은 지표에 배수트렌치를 계획하여 물이 바닥으로 넘치지 않도록 계획하여 설계한다.

다) 주차장 등의 트랜치에 연결배수배관을 계획하여 물이 옥내로 넘치지 않도록 계획하여 설계한다.

라) 각개, 신정, 루프 등의 통기 방식으로 원활한 배수의 흐름이 유지될 수 있도록 계획하여 설계한다.

바. 기타 설비

1) 기반시설 조사 및 설비계획 수립

가) 시상수도, 하수관거, 도시가스 등 부지주변의 기반시설을 사전에 조사하고 계획하여 설계한다.

나) 타 공종(전기, 통신)의 인입관로 계획을 참조하여 상호 간섭이 없도록 계획하여 설계한다.

2) 가스설비

가) 도시가스사업법, 소방기본법, 건축법과 이의 시행을 위한 고시, 조례 및 기타 관련법규를 준수하여 설계한다.

나) 기기 및 재료의 규격은 특기하지 않는 한 K.S, 형식승인기준 또는 관계법규가 정하는 검사규정에 따른다.

3) 주방설비

가) 식수인원을 감안하여 적정한 설비를 적용 설계한다.

나) 기구는 조리 동선, 배관 및 환기설비 등을 고려하여 합리적으로 배치한다.

다) 주방은 급․배수가 원활하여야 한다.

라) 주방기구는 내식성 스테인리스제로 하여야 한다.

마) 적절한 환기설비(자연환기와 강제 환기 병행)를 고려하여야 한다.

바) 음용수를 냉각시켜 지속적으로 공급할 수 있도록 냉수기 및 정수처리장치를 계획한다.

사) 주방은 급배기 설계와 내부 온도조절 냉난방 공조 설계가 상호 연동 되도록 하고, 식당의 냄새제거가 되도록 계획한다.

(2) 특기사항

가. 위생설비

1) 위생실 및 각 실에 배치된 손세정대에는 반드시 냉, 온수를 공급하여야 한다.

2) 작업장의 모든 유틸리티 배관은 수직배관을 원칙으로 계획한다.

3) 식당 운영에 대한 기구산정 및 적정 배기후드 소요량을 구하고 계획하여 설계한다.

나. 작업장 소음방지 계획

1) 내부에 설치되는 기계는 작업자 근무 장소에는 소음이 규정치 이내가 되도록 계획한다.

3. 소방설비계획

(1) 일반사항

가. 설계 기본방향

1) 신축건물에 대한 소방설비를 계획함에 있어 화재를 초기에 진압하고 재난재해 및 그 밖의 위급한 상황에서의 구조․구급활동을 원활하게 할 수 있는 소화시설을 설치함으로서 국민의 생명과 신체, 재산을 보호하여 공공의 안녕질서 유지와 복리증진에 이바지함을 지표로 계획하여 설계한다.

2) 본 설계는 안전성, 경제성, 장래성을 감안하도록 계획하여 설계한다.

3) 건축 구조에 부합하여 효율적인 설비를 계획하여 설계한다.

4) 소방시설은 작동이 확실하고 신뢰성 있는 시스템으로 계획하여 설계한다.

5) 화재감시등 소화활동을 위한 감시실을 협의하여 계획한다.

나. 소방설비의 설계

1) 건물의 용도 및 규모에 맞는 소방설비에 대한 설계를 하여야 한다.

2) 본 설계는 소방기본법, "소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률" 등 최근의 관련법규를 준수하고, 관할소방서와 협의하고 계획하여 설계한다.

3) 초기화재감지, 초기화재진압, 화재피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터의 인명 및 시설물 보호를 최우선으로 계획하여 설계한다.

4) 각종 소방설비 시스템은 준공 후 유지보수관리에 용이한 시스템을 계획하여 설계한다.

5) 건축, 기계설비, 통신, 전기 등 관련공사의 설계지침서를 참조하여 유관공사의 기능에 영향을 주지 않도록 계획하여 설계한다.

다. 통신실, 전기실은 물을 사용할 수 없는 곳은 별도의 독립적인 자동소화시설은 적정설비를 계획하여 설계한다.

라. 자동화재탐지설비는 각종 방식(Analog & Digital)의 기능, 성능 및 유지관리면 등을 비교 검토하고, 타 시스템과 호환이 되도록 계획하여 설계한다.

마. 무선통신보조설비는 화재 시 화재진압 등 설치대상 여부를 면밀히 검토하고 계획하여 설계한다.

바. 설계도서 납품시 설계도면에 건축 옥외배치도, 건물평면도, 천정마감, 부하일람표를 첨부하여 납품하여야 한다.

사. 부하계산은 정확한 근거(동력장비 일람표 등)에 의거 작성하여 소방펌프 용량 선정에 차질이 없도록 계획하여 설계한다.

아. 소화수조 배치위치는 건물용도, 설비의 급수방식, 저수조방식과 고가수조방식의 장단점을 비교 검토하고 계획하여 설계한다.

(2) 특기사항

소방시설은 아래의 종류를 참조하여 소방기본법, 소방기본법령, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률과 기타관련법령 등에 의거 건물의 용도 및 실의 용도에 적법한 설비를 계획하여 설계한다.

가. 소화설비

1) 소화기구

가) 수동식 소화기

나) 자동식 소화기ㆍ캐비넷형 자동소화기기 및 자동확산 소화용구

다) 소화약제에 의한 간이 소화용구

2) 옥내소화전설비

3) 옥외소화전설비

4) 스프링클러설비ㆍ간이스프링클러설비 및 화재조기진압용 스프링클러설비

5) 물분무 등 소화설비(물분무, 포, 이산화탄소, 할로겐화합물, 청정소화약제, 분말 소화설비)

나. 경보설비

1) 자동화재탐지설비 및 시각경보기

2) 누전경보기

3) 자동호재속보설비

4) 비상경보설비(비상벨, 자동식 사이렌)

5) 가스누설경보기

6) 통합 감시시설

다. 피난설비

1) 미끄럼대, 피난사다리, 구조대, 완강기, 피난교, 피난밧줄 등

2) 유도등 및 유도표지

3) 비상조명등 및 휴대용 비상조명등

4) 방열복, 공기호흡기 및 인공소생기

라. 소화용수설비

1) 소화수조, 저수조 그 밖의 소화용수설비

2) 상수도 소화용수 설비

마. 소화활동설비

1) 제연설비

2) 연결송수관설비

3) 연결살수설비

4) 비상콘센트설비

5) 무선통신보조설비

6) 연소방지설비

바. 건축인ㆍ허가에 포함되는 방화구획, 방화셔터, 배연창 제어는 공사범위를 명확히 하고 소방 수신반과의 연동에 원활한 방식을 계획하여 설계한다.

4. 전기설비계획

(1) 일 반 사 항

본 설계지침은 전기설비 설계의 기준을 정하여 제반 설계업무 수행에 신속성, 정확성 및 경제성을 기하고, 식품가공설비에 적합하게 대응하는 설계가 되도록 한다.

가. 일반지침

1) 본 설계는 전기사업법, 전기공사업법, 전기설비기술기준, 내선규정, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법 등 관련 제반법규에 의거 설계한다.

2) 전기설비는 안전성, 신뢰성, 경제성 유지관리등에 중점을 두고 계획을 수립 한다.

3) 전기실, 발전기실 및 전기샤프트(EPS)의 위치선정은 아래 사항을 유의하여 선정한다.

가) 인입선로가 약전선로와 중첩되지 않도록 한다.

나) 장비교체 및 증설을 위해 장비 반·출입 대책을 고려하여야 한다.

다) 전력간선 길이가 최소화 되도록 위치를 부하 중심점에 선정하여야 한다.

4) 각 층 부하의 중심에 EPS를 계획하여 전력공급용 기기(panel등)를 설치하도록 하고 유지보수 시 안전과 작업성을 고려하여 충분한 작업공간을 확보하여야 하고 통신 중간단자반 통신샤프트(TPS)는 별도로 확보하여야 한다.

5) 부하용량계산은 조도와 전열, 기계장비일람표 등 정확한 근거에 의거 작성하고 수전용량을 결정한다.

6) 변압기는 용도별 전압별로 뱅크를 구성한다.

7) 배관 배선공사

가) 배관 및 배선(전선 및 케이블)은 KSC IEC-60364규격과 관련규정에 의거 용량에 적합한 규격 또는 동등 이상의 것이어야 하고 허용전류, 단락전류 및 전압강하, 고조파전류, 시공방법, 지진등에 대하여 충분히 고려하여 계획하여야 한다.

나) 천장 속 은폐배관 및 노출 배관은 후강 아연도전선관을 사용하고 절연이 필요한 접지배관 및 슬라브 내 매입배관에 한하여 내충격성 경질비닐 전선관을 사용할 수 있다.

다) 슬라브 내 매입하는 경우 배관 굵기는 내선규정에 의거 φ28mm이하가 되도록 한다.

8) 설계도서의 구분

가) 기본설계 : 설계개요서, 전력간선계통도, 부하용량추정서, 공사비계산서, 법규검토서 등

나) 실시설계 : 설계도면, 부하용량계산서, 조도계산서, 전압강하계산서, 차단용량계산서, 트레이규격계산서, 공사비내역서 및 추산서, 일위대가, 단가비교표, 시스템등 각종 검토서, 시방서, 특기시방서, 현장설명서 등

9) 본 설계의 공사공종은 도급공사, 지급자재(공사용자재 직접구매 제품 포함), 별도공사로 구분하여 작성할 수 있으며, 유지관리 및 공사의 연계성, 시공 효율성 등을 감안하여 공종구분을 조정할 수 있다.

10) 시방서 및 도면 : 특정자재 및 모델명 표기를 금지하되 불가피한 경우 제품 성능 비교표 및 설계자의 선정의견서 등을 첨부한 별도보고서를 제출하도록 한다.

11) 제출서류

가) 모든 서류는 A4용지를 사용하여 작성하고 편철 제본하여 제출한다.

나) 계산 및 데이터 위주의 서류(내역서, 일위대가, 단가조사표, 산출근거 등)는 엑셀프로그램으로, 설계도면은 CAD로 작성 CD-ROM에 수록하여 제출한다.

다) 향후 업무추진이 원활하도록 전기공사 감리대상여부, 감리자 배치기준,    용역 대가 초안을 작성하여 서안동농협에 제출한다.

(2) 전기설비공사의 분류

가. 도급공사

1) 전원설비(전력인입 및 수변전 설비)

2) 전력간선설비

3) 동력설비

4) 전등 및 전열설비(외등설비 포함)

5) 피뢰침, 접지공사등 기타전기 설비

나. 별도공사

1) 한전불입금(한국전력공사)

2) 사용전검사 수수료(한국전기안전공사)

(3) 공정별 세부사항

가. 전원설비(전력인입 및 수변전설비)

1) 부하의 설비용량은 적정 수용율, 부등율을 적용한다.

2) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기한다.

3) 계통사고의 파급을 방지하기 위하여, 신뢰도의 보호기기를 사용하여 사고 파급의 영향을 최소화 한다.

4) 전자화 배전반으로 설계를 실시한다.

가) 표시기능, 각종 릴레이, Data 통신기능

나) 각종 릴레이

다) 차단기의 원방조작 및 감시기능

5) 전력손실이 적은 기기를 확보하며 에너지 절감하도록 한다.

6) 주변전실에서 전력중앙감시를 할 수 있도록 한다.

7) 예비전원의 설비의 확보 및 자가발전, 무정전공급방식 전원과 합리적 연계성을  검토한다.

나. 전력간선 설비

1) 간선방식은 3상4선식 380/220V로 하고, 전력간선 케이블은 CV케이블로 설계한다.(단 가공공장 생산장비는 사용전압을 조사하여 반영하고 별도 변압기 뱅크 및 간선으로 구성한다.)

2) 전기PIT는 강전과 약전용 배관을 구분하여 이격 설치하고, 층간 방화구획이 되도록 설계한다. (전기 PIT에는 각층마다 출입문-0.8×1.8M이상-설치)

3) 전력PIT 내 전력간선용 배관공사는 CABLE TRAY공사로 설계한다.

4) 분전반 DOOR 재질은 전기PIT내에 설치될 경우 노출형 STEEL 사무실 등 공공장소에 설치할 경우 매입형 STS제로 설계한다.

5) 각종 전력간선 전원공급방식은 단독 공급방식으로 설계한다.

6) 전선 및 케이블의 양단말은 압착터미날을 설치하여 시공토록 하며 90㎟이상은  2HOLE 동관단자로 설계한다.

7) 배전방식은 다음사항을 고려하여 선정한다.

구 분	CABLE TRAY	전 선 관
장 점	- 다수의 전선 수납가능 - 장구간의 배선 및 유지관리 용이 - 시공 용이	- 취급용이 - 단구간시배전시 유지관리 용이 - CABLE TRAY의 완전보호 기능
단 점	- CABLE TRAY의 완전보호 곤란 - 약전류 전선과 같이 사용시 별도의 차폐시설 필요	- 분기마다 풀박스 필요 - 장구간시 배선 및 유지관리 곤란 - 확장 및 변경 곤란

※소용량 간선 : 전선관 사용, 대용량 간선 : CABLE TRAY사용

8) 건축물 내부에 설치되는 장비 사용전력량을 조사하여 반영하고 장비 전용 동력반 1차까지 간선을 설계한다.(동력반 위치는 사업부서와 협의 반영)

다. 동력설비

1) 기계설비부하의 용량, 규격, 용도를 파악하여 배선 설계하고 자동제어 설비가 설치될 경우 시공 범위를 기계설비설계자와 협의하여 설계한다.

2) 전동기용량이 11KW(15HP)이상은 기동방식을 Y-△ 기동형으로 설계한다.

3) 유도성부하에는 적정용량의 역률 개선용 콘덴서를 설치한다.

4) 기계실 내 기계설비 전원공급방식은 CABLE TRAY를 사용토록 설계한다.

5) 전동기운전반(MCC)은 UNIT 인출형으로 하고 MCC설치 위치는 기계설비 설계자와 협의하여 확정한다.

6) MCC반내 관전류 계전기는 전자식 과전류 계전기(EOCR)로 설계한다.

7) 동력설비 설계 시 협의사항

가) 동력부하의 감시, 제어방법 및 감시반 등의 확인

나) 기구의 용도, 위치, 용량 확인

다) 기구의 제어 및 보호방식 결정

8) HACCP 위생장비는 조사하여 동력설계에 반영한다.

라. 전등 및 전열설비

1) 각 실별 조도기준

실 별	조도(Lux)	실 별	조도(Lux)	실 별	조도(Lux)
사 무 실	220 이상	견학로 및 복도	220 이상	식 당	220 이상
주 방	220 이상	회 의 실	220 이상	탈 의 실	220 이상
홀	220 이상	화 장 실	220 이상	가공작업장	육안선별 540 이상

2) 조명기구 상세도는 구체적으로 정확하게 표시한다.

3) 형광등기구의 안정기는 전자식안정기(KS, 고마크 품)로 하고, 1등용 개별식으로 설계한다.

4) 등기구보강에 따른 등기구 보강비는 설계에 반영하고, 상세도를 포함한다.

5) 전열 수구는 벽부형과 바닥형을 혼용하여 설계하되 바닥형은 전열을 전화수구를 수용할 수 있는 SYSTEM BOX로 설계한다.

6) 전기실, 기계실의 전열수구 높이는 1.2M이상으로 하고 방우형으로 설계한다.

7) 전열수구는 일반용, FCU용, FAN용으로 구분하여 설계한다.

8) 경량칸막이에 설치되는 전등 스위치 및 전열수수는 천장내에 JOINT BOX를 설치하여 가용관을 사용 칸막이내에 매입되도록 설계한다.

9) 최상층 단열부위의 전등 및 전열배관은 결로에 대비하여 노출배관으로 설계 한다.

10) 전열용수구 외에 아래의 기구에는 적당한 위치에 별도의 콘센트 설치

가) TV공청안테나 증폭기함, 방송용 AMP, EPS실

나) 화재수신반 등의 주요감시반 등 (CCTV주장치 포함)

11) 가로등의 설치는 고효율․절약형 안정기로 설정 설치한다.

12) 가공시설 등 작업의 효율성을 감안하여 조명기구를 발주자와 상의하고 승인을 득한 후 결정한다.

13) 각 장비 및 시스템에 부응하는 안정된 전원공급을 검토한다.

14) Module에 의한 합리적인 Zoning 및 추가증설이 용이한 방식으로 설계한다.

15) 일반전열 콘센트는 Computer 사용이 가능하도록 제1종 접지로 설계한다.

마. 피뢰침·접지공사등 기타 전기설비

1) 피뢰침 및 접지규모를 검토하여 반영한다.

2) 규정 및 기준에 맞는 접지공사가 되도록 설계하여야 한다.

3) 기타 전기설비 설계여부를 검토하여 발주처 담당자와 협의하여 적법하게 설계한다.

(4) 특기사항

가. 전열배관은 판넬속에 매입할 수 있도록 계획한다.

나. 모든 배관은 수직배관을 원칙으로 한다.

다. 생산설비의 전용동력반 1차 간선까지는 전기공사분으로 설계하고 전용동력반 및 2차 간선은 생산설비 공사분으로 설계한다.

5. 정보통신설비계획

(1) 일 반 사 항

가. 본 설계는 전기통신기본법, 정보통신공사업법, 전기통신사업법, 전기사업법, 전기설비기술기준, 내선규정 등 관련법규에 의거 설계한다.

나. 본 설계는 기본설계와 설계로 구분하여 작성한다.

1) 기본설계도서 : 설계개요서, 통신간선계통도, 전화국선 및 내선용량추정서, 공사비개산서 법규검토서등

2) 실시설계도서 : 설계도면, 계산서(국선 및 내선 용량 계산서, AMP용량계산서 TV전계강도계산서 등), 공사비 내역서, 일위대가표, 단가대비표, 시스템 등 각종장비검토서, 시방서, 특기시방서, 현장설명서

다. 각종 통신설비 SYSTEM은 유지관리 보수가 용이한 SYSTEM을 구성한다.

라. 건축, 기계설비, 전기설비 등 관련공사의 설계지침서를 참조하여 유관공사의 기능에 영향을 주지 않도록 설계한다.

마. 본 설계의 공사구분은 도급공사, 지급자재, 별도공사로 구분하여 작성하되 유지관리 및 공사의 연계성, 시공효율성 등을 감안하여 공사 구분을 조종할 수 있다.

(2) 통신설비공사의 분류

가. 도급공사

1) 전화설비공사

2) 방송설비공사

3) 보안설비(CCTV설비)

4) TV시청설비공사

5) 통합배선설비등 기타 통신설비

(3) 공정별 세부사항

가. 전화설비

1) 회선의 표준 설비수

2) 국선전화 인입관로는 관할 한국통신측과 협의하여 인입루트 확보하고, 배관은 HI PVC관으로 설계한다.

3) 국선단자함(MDF)의 국선과 내선의 비율은 1:3으로 하고 국선용 보안기를 포함한다. (기존 사용회선을 참고하여 설치 요함)

4) 국선 100P이상의 MDF는 철가형으로 설계한다.

5) 전기통신기본법에 의한 구내통신실(통신PIT)설치가 의무화된 건물일 경우 적법하게 구내 통신실을 확보한다.

6) 통신PIT 확보 시에는 각종 통신설비 간선은 CABLE TRAY를 이용하여 배선하도록 설계한다.

7) 통신 접지는 타접지와 별도 기기보호를 위하여 1종 접지로 설계한다.

나. 방송설비

1) 방송용 주 앰프는 사무실의 규모 및 관련법규에 적합한 기능을 갖도록 선정하되 충분한 출력용량을 확보하고 기능이 단순하며 경제적인 것을 선정한다.

2) 방송용 스피커는 천장 매입형과 벽부 노출형으로 설계한다.

3) 전관 방송 및 구역별 전용방송이 가능하도록 회로를 구성한다.

4) 주요실에는 음향조절기(ATT)를 설치한다.

다. 보안설비(CCTV 설비)

1) CCTV 시스템 장비 및 카메라 위치는 사업부서와 협의하여 선정한다.

라. TV공시청 설비

1) TV공시청 안테나는 지역별 방속국 수신채널을 감안하여 필요대역의 안테나를 설치한다.

2) 해당 지역의 난시청 여부를 조사하여 난시청지역일 경우 유선방송수신으로 설계한다.

3) TV안테나 소자는 스테인리스 스틸로 설계한다.

4) 안테나 설치장소는 낙뢰 보호용 피뢰침을 설계한다.

5) 케이블 TV수신용 관로를 확보한다.

마. 통합배선설비등 기타 통신설비

1) 건물 내의 LAN, OA 및 전화배선망을 표준화된 체계로 선행 배선하여 통합배선 및 접속관리SYSTEM의 경제성, 유지보수가 편리하도록 설계한다.

2) 다양한 DATA전송 및 다 기종 단말기 접속이 편리하도록 설계한다.

3) DATA 및 음성정보 서비스의 설치, 변경, 확장에 유연하게 대응할 수 있도록 설계한다.

4) 통신배선은 UTP케이블을 사용하고 단말에 RJ45잭을 설치한다.

5) 각종 정보시스템은 실시간 정보처리가 되어야 하므로 고속통신망(100MBPS 이상)을 구축하여야 한다.

6) 통신회선은 음성, 데이터를 동시 전송할 수 있는 통합배선 방식으로 단말유니트마다 예비회선을 설치한다.

7) 통신회선 중간단자반(IDF)은 패치패널로 설치하여 망 관리를 전산화할 수 있도록 하여 일관되고 체계화가 가능한 관리가 가능토록 설계한다.

8) 배선용량, 차폐효과, 배선거리 및 면적확인하고 고속통신망 IDF에서 단말유니트까지는 가급적 100m이하로 계획하여야 한다.

9) 기타 통신설비 설계여부를 검토하여 발주자 담당자와 협의하여 적법하게 설계한다.

Ⅳ	설계도서 작성요령

1. 구조계산서

가. 구조계산은 관계 법령상 유자격자가 작성 서명하여야 하며 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 적용규준(CODE)

2) 기본 가정수치 및 근거

3) 골조의 X. Y단면에 대한 전단력도, 휨모멘트도 작성

4) 기초 형식선정 검토

5) 슬라브의 처짐량 검토

6) 지하수 영향에 대한 검토

7) 횡력에 대한 검토

8) 최상층 증축에 대한 검토

9) 기타 필요한 사항

나. 구조계산은 적정한 안전율이 감안되어야 한다.

다. 구조계산서에는 적용공식, 계산과정을 누락없이 표기하여 해석, 진단, 검증이 용이 하도록 작성한다.

2. 시공상세도 작성

콘크리트 구조물의 설계는 현장기능공들이 쉽게 이해할 수 있도록 다음 요령에 의거 시공 상세도를 작성하여야 한다.

가. 철근 배근도에는 정․부 철근 등의 유효간격 유지용 및 철근피복 두께(측․저면) 유지용 스페이서 및 CHAIR-BAR의 위치, 설치방법 및 가공을 위한 상세도면을 작성한다.

나. 스페이서 또는 CHAIR-BAR 등은 철근 및 콘크리트 타설시의 하중에도 각종 철근 간격이 충분히 유지될 수 있도록 그 위치를 도면상에 명기하여야 한다.

다. 스페이서 또는 CHAIR-BAR 등의 철근가공 및 설치상세도에는 주철근 등 각 철근간의 순 간격, 거푸집과 철근과의 순간격 등을 고려하여 그 수치를 표시하여야 한다.

라. 시공이음, 신․수축 이음부의 위치, 설치방법 및 사용재료(채움재) 등에 대한 상세도면과 시공법을 작성 표기하여야 한다.

마. 철근 겹 이음 길이 및 위치

1) 철근의 이음부는 구조상 약점이 되는 곳이므로 최대인장응력이 작용하는 곳에서는 이음이 되지 않도록 하여야 한다.

2) 겹이음 길이는 철근콘크리트 시방규정에 따라 충분한 이음길이를 두어야 하고 동일 단면에 집중되지 않도록 겹 이음 길이, 겹 이음 위치 등의 도면을 작성하여야 한다.

바. 도면상에 표시 안되는 부분은 도면 하단에 주서로 설명을 하여야 한다.

3. 시방서

가. 시방서의 작성은 공통사항만 표준시방서를 기준으로 하고, 기타는 당해공사의 특성에 부합되는 특기 시방서를 별도 작성하여야 한다.

나. 특별시방서에는 물량명세서 및 도면에 표시되지 않은 사항과 도면에 표시할 수 없는 기술적인 사항 등을 명기하며 해당공사에 대하여 발주자가 수급자에게 시공과 관련하여 특별히 유의하여야 할 요구사항을 정하는 것으로 일반시방서와 특별시방서를 혼동하지 않도록 확실히 작성하여 시공자가 혼란을 일으키지 않도록 한다.

1) 신공법과 관련하여 시공 시 특별히 유의하여야 할 사항

2) 수급자가 제공하여 시공하는 건설자재 중 기준 및 재질과 시험방법 등을 특별히 명시하여야 할 사항

3) 시공과 관련한 시험방법 등 특별히 명시하여야 할 사항

4) 레미콘, 아스콘의 경우 배합설계의 승인사항, 타설 또는 포설방법 등 특별히 명시하여야 할 사항

5) 안내표지판, 교통표지판, 표지병 등에 대한 재질, 야관조도 등 도면에 표시하기 어려워 특별히 명시하여야 할 사항

6) 콘크리트 강도, 슬럼프, 설계방법, 시공순서, 타설 순서, 균열방지대책, 양생방법 등 품질허용 기준명시

7) 기타 공사시공과 관련하여 특별히 명시하여야 할 사항 등

다. 한글과 아라비아 숫자로 작성하며, 영문 및 한문 필요시 괄호 안에 명기한다.

라. 건설용 자재 중 시험을 필해야 하는 품목은 검사 및 시험규정을 제시하고    시험이 가능한 기관을 명기하여야 한다.

4. 내역서

가. 내역서 작성에 있어서 설계수량은 정부제정 건설공사 표준 품셈을 기준하고, 원가계산은 회계 예규 “원가계산에 의한 예정가격작성준칙”을 기준으로 산출하여 Excel 프로그램으로 내역서를 작성하여 PC용 CD를 함께 제출하여야 한다.

나. 공사비를 산출할 때에는 아래자료를 기준으로 산출하여야 한다.

1) 노임 : 대한건설협회에서 조사 공포한 시중노임단가

2) 중기사용료 : 경상북도 설계기준

3) 수량 및 단가산출은 정부재정 건설공사 표준품셈에 의하여 산출하고 이에 의할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 감독관과 협의하여 산출하여야 한다.

4) 재료비는 조달청 발간 가격정보, 물가자료, 물가정보지를 단가비교표를 작성하여야 하며 그중 최저가를 적용한다.

가) 견적 처리 시에는 3개 업체 이상 견적을 비교하여 최저가를 적용한다.

나) 특수 자재는 공인 물가조사기관의 원가계산 가격

5) 운반비는 운반장비, 운반장소 및 거리, 도로상태 등 운반비 산정에 대한 세부산출내역을 첨부하여야 한다.

6) 단가 적용지역은 경상북도로 한다.

5. 자재선정

가. 모든 자재는 발주자의 사전 검토를 받아 설계에 반영한다.

나. 설계 시 적용되는 주요재료는 KS품을 사용하지 아니하는 경우 선정시험을 실시하여 설계도 및 시방서에 그 품질기준을 명시하고 시험성적표는 설계서 납품 시 제출하여야 한다.

6. 참조자료 및 설계자료

설계시 정부 또는 공공단체가 발간한 자료를 인용하거나 기타 자료를 참고할 때에는 반드시 참고자료의 근거를 명시하여야 한다.

7. 설계도면 작성 시 유의사항

가. 도면 표준 및 규격

1) 도면은 KS제도 통칙을 따르며, 도면 규격은 Aо(841×1189)를 원칙으로 한다.

2) 한글과 아라비아 숫자를 작성하며, 영문 또는 한문 필요시 괄호 안에 명기한다.

나. 도면표기 머리문자

1) 건축도면 : A

2) 구조도면 : S

3) 기계설비도면 : M

4) 토목도면 : C

5) 조경도면 : L

6) 전기설비도면 : E

다. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 시공 및 적산이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수의 명확한 표기

2) 각종 사용자재의 명칭 표기

3) 각종 부착시설물의 표기

4) 토목, 건축, 기계설비, 전기설비 등 기타 부대설비의 관련 공사와 관련 하여 명확한 구분표시

5) 철근 배근도에 있어서 절곡근의 위치 정착 및 이음길이 등을 명확히 기입

6) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있는 보조 설계도면(상세도)의 충분 한 작성

7) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관(대한건축학회, 공인연구소 등)의 기술검토서를 첨부

Ⅴ	붙임 서식

○ 붙임 1. 책임기술자선임계

○ 붙임 2. 하도급 승인요청서

○ 붙임 3. 주간공정보고

○ 붙임 4. 월간공정보고

<붙임 1>

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2023.   .   .

4. 착수  일자 : 2023.   .   .

5. 완수예정일 : 2023.   .   .

-  아    래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2023.    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

서안동농업협동조합장 귀하

<붙임 2>

하도급 승인요청서

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 2023.   .   .

4. 착수  일자 : 2023.   .   .

5. 완수예정일 : 2023.   .   .

-  아   래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사, 실내건축 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오니 설계용역계약 특수조건에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2023.     .     .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

서안동농업협동조합장 귀하

<붙임 3>

주 간 공 정 보 고

�   용 역 명 :

�   용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2023년   월   일 ～     년   월   일

◦계약금액 :

�   용역진행사항

구 분	전주진행사항(2023. . .)	금주예정사항(2023. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

서안동농업협동조합장 귀하

<붙임4>

월 간 공 정 보 고

�   용 역 명 :

�   용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2023년   월   일 ～     년    월    일

◦계약금액 :

�   용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2023. . . ～ 2023. . .)	비고
첫째 주		(실시/예정공정)
둘째 주
셋째 주
넷째 주
다섯째 주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                       (인)

서안동농업협동조합장 귀하